「서울특별시학교밖청소년지원센터」 스틸패널방수 및 외벽 방수 공사시방서

□ 작 업 개 요

1. 작 업 명: 서울특별시학교밖청소년지원센터 스틸패널방수 및 외벽 방수 공사

2. 공사위치: 서울특별시 동작구 여의대방로20길 23-1

3. 공사범위: 자유회관 중앙 옥상 및 외벽

4. 공사내용

- 중앙 옥상 패널방수 작업(0.8T, 포스맥)

- 외벽 방수 작업

5. 공사기간: 착수일로부터 28일 이내

- 계약기간은 발주기관의 사정에 의해 변경 가능하며, 계약자는 계약기간 내
발주기관이 요청하는 공사 일정에 따라 작업을 수행하여야 함

Ⅰ		총칙

1.1  일 반 사 항

1.1.1  적용범위

⑴ 본 시방서는 “서울특별시학교밖청소년지원센터(이하 ”센터“라 한다) 옥상 및 외벽 방수공사”에 적용하며, 본 시방서에 명기하지 않은 사항은 “건축공사 표준시방서”에 따른다. 다만, 당해 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다.

1.1.2  용어의 정의

⑴ 이 시방서에 명기된 감독자라 함은 이공사의 공사관리, 기술관리를 담당하는 “센터”가 임명한 자를 지칭하고, 협력원이라 함은 이 공사의 해당 “센터”가 선정한 감독보조원을 말하며, 이들 모두를 감독원이라 한다. 또한 발주기관이라 함은 “센터”를 지칭 한다.

⑵ 이 시방서에서 계약자라 함은 공사도급 계약서에 기재되어 있는 수급자(하수급업자 포함) 또는 그의 대리자와 그들이 위임하는 현장대리인, 시공기사를 말한다.

1.1.3  감독원의 업무

⑴ 계약자에 대한 감독원의 지시 및 승인 또는 검사는 모두 감독원의 권한과 책임이며, 감독원의 중요한 지시 및 승인은 문서로 하고 경미한 사항은 현장에서 구두로 지시 및 승인을 할 수 있다.

1.1.4  계약자의 책무

⑴ 계약자는 ｢건설산업기본법｣, ｢환경보전법｣, ｢산업안전보건법｣, ｢시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법｣ 등 기타 공사의 수행과 관련되는 법률 및 규정 등을 준수하여야 한다.

⑵ 계약자는 공사에 적합한 기술자를 ｢건설산업기본법｣의 규정에 따라 배치하고 그 중 1인을 현장대리인으로 한다. 현장대리인은 이 공사의 수행에 필요한 제반 지식과 충분한 경험이 있는 자로서 ｢건설산업기본법｣에 명기된 적합한 자격의 건설기술자이어야 한다.

⑶ 계약자는 착공 전에 시방서 등 설계도서를 면밀히 검토하고 설계도서의 오류, 누락 등으로 공사에 잘못이 생기거나 지연되지 않도록 적절한 조치를 취해야 한다.

⑷ 설계도서 검토 결과 다음과 같은 경우 신속히 감독원에게 통지하여야 하고
감독자와 상의해 해결책을 강구하여야 한다.

- 설계도서의 내용이 명확하지 않거나 그 내용에 의문이 생긴 경우

- 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

- 예기치 못한 특별한 사정으로 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 경우

- 기타 하자 발생이 우려되는 사항이 있는 경우

⑸ 계약자가 감독자에게 통지하지 아니하거나 감독자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여 감독자의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

⑹ 감독원의 승인 없이 도면과 일치하지 않게 시공되어 감독자가 인지하지 못한 상태에서 준공된 부분이 있다면 동 부분에 대한 하자보수는 하자보수 책임기간에 관계없이 보수할 책임이 있다.

⑺ 계약자는 감독원이 공사감독업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

⑻ 계약자는 현장대리인 등 계약자가 당해 공사를 위하여 임명·지정·고용한 자 및 계약자와 납품 계약 또는 하도급 계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

⑼ 현장대리인 등 계약자가 당해 공사와 관련해 고용한 자가 불미한 행위를 하거나 시공에 부적합하다고 인정하여 감독자가 교체를 지시하였을 경우 계약자는 이에 응하여야 한다.

⑽ 공사대상물을 발주기관에 인도하기 전에 발생한 대상물의 파손, 오염, 변형 등에 따른 피해에 대해 계약자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

⑾ 본 공사에 관하여 발생하는 모든 민ㆍ형사상 손해(제3자에 미치는 손해를 포함)는 계약자가 부담하여야 한다.

⑿ 계약자는 본 공사와 관련하여 감독자가 요구하는 착수계, 준공계 등 서류 일체를 즉시 제출하여야 한다.

1.1.5  경미한 변경

⑴ 도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항이라 할지라도 현장 마무리, 맞춤 등의 관계로 재료의 위치, 설치, 공법의 사소한 변동 또는 이에 따른 약간의 수량 증가 등 경미한 변경은 감독원의 지시에 따른다.

1.1.6  설계변경

⑴ 시공 중 설계변경 사항 발생 시 신속하게 감독원과 처리방법을 협의토록 한다.

1.1.7  안전관리

⑴ 계약자는 작업자에게 공사 수행에 필요한 직무교육 및 안전교육을 실시하여야 하고, 그 교육 실적을 발주기관에 제출하여야 한다.

⑵ 계약자는 업무를 수행함에 있어 발주기관의 안전관리 규정을 준수하여야 하며 작업자의 건강, 위생, 안전관리 및 작업규율 등에 관하여 일체의 책임을 진다.

⑶ 계약자는 안전사고 예방을 위한 모든 제반 조치를 취해야 하며 작업자는 반드시 작업복, 마스크 등 안전장비를 착용하여야 한다.

1.1.8  보안관리

⑴ 계약자는 본 공사에 참여자에 대하여 다음 각 호에 대한 교육을 철저히 하여 위배사항이 발생하지 않도록 하여야 한다.

① 사전 허가 없이 출입이 금지된 구역을 출입하는 행위

② 작업수행으로 알게 된 보안사항 등을 외부에 누설하는 행위

③ 기타 연구원 보안규정에 저촉되는 행위

1.2  공 사 현 장 관 리

1.2.1  일반사항

⑴ 공사현장관리는 원칙적으로 계약자가 자주적으로 한다.

⑵ 계약자는 공사 착수 전에 현장을 면밀히 점검하고, 현장에 맞지 않는 시공방법 및 규격 등으로 인해 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

⑶ 현장 품질 관리

① 계약자는 현장대리인이 공사 종료 시까지 품질관리를 전담하게 하여야 한다.

② 계약자는 각 단계별 작업 상태에 대해 감독자의 확인을 받은 후 다음 단계의 공정을 시작하여야 한다.

③ 계약자는 품질 향상 등을 위해 필요한 경우 감독자와 협의해 변경 시공할 수 있다.

④ 공사완료 후의 마감상태 등은 요구 기준에 적합하도록 시공하여야 하며 미흡하다고 인정되는 사항에 있어서는 즉시 조치하여야 한다.

1.2.2  관계법규의 준수

⑴ 공사현장의 관리는 ｢건축법｣, ｢건설산업기본법｣, ｢근로기준법｣, ｢산업안전보건법｣, ｢소방법｣ 등 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 시행하여야 한다.

1.2.3  정리 정비 청소

⑴ 공사현장에 있어서는 항상 장내의 여러 재료, 여러 기계기구, 기타의 정리정돈, 점검·정비, 청소 등을 충분히 하고 현장내외를 청결히 유지하도록 한다.

1.2.4  재해 및 공해의 방지

⑴ 공사시공에 따른 재해 및 공해를 방지하기 위하여 계약자는 책임지고 ｢산업안전보건법｣ 등 관계법령을 준수해야 하고 공사 중의 화재, 소음, 진동, 먼지, 섬광, 기타 사고를 미연에 방지하기 위하여 적절한 조치를 하여야 한다.

⑵ 계약자는 적절한 인원의 배치해 작업시간 이외에도 공사현장 내의 사고, 화재, 도난 등 안전사고를 방지하여야 하고 특히 위험한 곳의 점검은 꼼꼼히 한다.

⑶ 현장 주변의 건축물, 매설물, 통행인 등 제3자에 재해가 미치지 않도록 해야 한다.

⑷ 계약자는 작업 인원의 건강, 위생, 안전관리 및 작업규율 등에 관한 사항을 수립 및 실시하여야 한다.

⑸ 공사 현장 내 안전수칙, 출입금지 등 각종 안전 표지판을 적소에 배치하여야 하고 필요 시 감독원의 지시에 따라 안전요원을 배치해 관계자 외 인원의 무단출입으로 인한 사고를 예방하여야 한다.

1.2.5  사고 등 긴급시의 조치

⑴ 사고, 재해 또는 공해가 발생한 경우 및 발생할 우려가 있어 긴급을 요하는 경우에는 신속히 적절한 조치를 하고, 그 경위를 즉시 감독원에 보고한다. 그 조치에 대하여 감독원의 지시가 있는 경우에는 그 지시에 따른다.

1.2.6  건물 등의 보양

⑴ 기존부분, 시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은 적절한 방법으로 보양한다.

⑵ 손상을 받은 부분은 신속히 원형으로 복구한다.

1.2.7  발생재 등의 처치

⑴ 매설물, 토사 등 공사 중의 발생재 가운데 감독원에게 인도를 요하지 아니하는 것은 모두 현장 밖으로 반출하고 관계법규에 따라 처분하여야 한다.

⑵ 공사 시공 상 지장이 되는 장해물의 처리는 감독원과 협의한다.

1.3  재 료

1.3.1  일반사항

⑴ 자재 반입 시 감독자의 입회하에 제조업자명, 상품명, 유효사용기간 등에 대해 검수를 받고 합격한 제품에 한하여 현장에 반입하여야 한다.

⑵ 현장 내에 사용되는 자재는 그 종류별로 단일 제조업자의 제품을 사용하며 공장에서 배합이 완료된 제품을 사용하여야 한다.

⑶ 계약자는 해당 제품에 대하여 감독자의 공인시험기관 시험성적서 제출 요구가 있을 시 이에 응해야 하며 검사비용은 계약자에서 부담하여야 한다.

⑷ 시험에 합격된 재료 시설물이라도 사용 시 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때는 이를 사용하지 아니한다.

1.4  시 공

1.4.1  시공일반

시공은, 설계도서, 그리고 발주기관에 제출한 공정표 등에 따라 시행한다.

1.4.2  공정표

⑴ 공사 실시에 앞서 공정표를 작성하여 감독자의 검토를 받아 제출한다.

⑵ 계획공정에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 지체 없이 작성하고, 감독자의 승인을 받는다.

⑶ 계약 이외의 공사와의 관련 사항이 있는 경우에는 감독자 지시를 받아 조정한다.

⑷ 주말 및 공휴일은 협의를 통하여 작업할 수 있다.

1.4.3  시공

⑴ 계약자는 공시시행 전 그 내용을 충분히 숙지하여 공사에 누락이 없도록 해야 하며 감독원과 공사 관련 충분히 협의하여 시공하여야 한다.

⑵ 시공 중 공사가 부실 또는 부당하다고 인정할 때에는 감독원의 지시에 따라 재시공 또는 적절한 조치를 하여야 한다.

⑶ 계약자가 공사를 소홀히 한다고 판단될 때에는 감독은 공사의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있으며 감독의 결정에 따라 공사내용 및 방법을 변경할 수 있다.

⑷ 모든 가설물은 사용 후 계약자의 부담으로 철거하여야 하며 주위는 청결히 원상복구 하여야 한다.

⑸ 시공의 검사는 원칙적으로 계약자가 시행하며 일일 시공 완료가 임박하면 작업이 곧 종료됨을 감독자에게 통보하여야 한다.

⑹ 감독원이 시공된 부분의 파손 및 하자 등으로 인한 보수 또는 재시공을 지시한 경우 계약자는 즉시 이를 이행하여야 한다.

1.4.4  시공의 입회

⑴ 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 공정은 감독원의 지시에 따라 그 시공을 감독원의 입회하에 진행해야 하며 필요한 부분은 사진 촬영을 해두어야 한다.

1.4.5  완성검사

⑴ 공사를 완료한 때에는 계약자가 검사하고 설계도서와 대조해 그 적합성을 확인한 후, 감독원에게 통보하여 검사를 받는다.

1.5  제 출 서 류

1.5.1 착수계

⑴ 계약자는 계약 후 7일 이내에 다음 각 호의 사항을 작성하여 감독자에게
각 2부씩 제출하여야 한다.

① 착공계	② 현장대리인계

③ 착공내역서	④ 예정공정표(안전관리계획 포함)

⑤ 재직증명서	⑥ 보안각서

⑦ 산재·고용보험 가입증명원	⑧ 기타 감독자가 요구하는 서류

1.5.2 준공계

⑴ 계약자는 공사가 완료 후에 다음 각 호의 사항을 작성하여 감독자에게
각 2부씩 제출하여야 한다.

① 준공계	② 준공검사원

③ 준공내역서	④ 사진대지

⑤ 산재·고용보험 완납증명원	⑥ 산업안전보건관리비 관련 증빙*

⑦ 기타 감독자가 요구하는 서류	(*사용내역서, 세금계산서, 관련 사진)

1.6  기 타 사 항

1.6.1  기타사항

⑴ 공사 중 발생하는 중대한 보고, 요청, 문제점 등에 대해서는 계약자가 감독자에게 서면으로 제출하여야 한다.

⑵ 본 계약의 해석상 이의가 있을 경우에는 발주기관과 계약자의 협의에 의하여 결정하고 협의가 이루어지지 않을 경우에는 중재기관의 중재에 따른다.

⑶ 본 계약에 정하지 아니한 사항에 대해서는 감독자와 계약자가 서면으로 합의함으로써 그 효력이 발생한다.

⑷ 본 계약에 관한 소송은 발주기관의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

Ⅱ		특기사항

2.1  재 료

2.1.1  품질기준

다음의 규격 및 성능의 요구조건을 따라야 한다.

⑴ 패널의 구성

재질: 아연3%, 마그네슘2.5%, 알미늄 3원계 고내식 합금도금강판

규격: 878mm x 878mm x 0.8T

⑵ 패널의 색상

전면판의 색상은 스톤녹색, 내후성, 도막두께 등 품질관리가 용이한 합금도금강판을을 사용함을 원칙으로 한다.

⑶ 패널의 코너처리

스틸패널의 코너는 슬라브 구조 및 형상에 맞게 절곡, 절단하여 적용하며 패널의 플랜 지부는 복합 판넬용 실링재 등의 처리로 누수를 방지할 수 있는 가공을 해야한다.

⑷ 상부 마갑캡

재질: 스테인리스스틸

규격: 35mm x 35mm x 0.6T

⑸ 하부 브라켓

재질: spc zn도금 + 스테인리스스틸 볼트

규격: Ø35 x 1.5T

⑹ 너트 및 나사

재질: spc zn도금 + 스테인리스스

규격: M8, M3 x 12

⑺ 실리콘 보호몰딩

재질: AL알루미늄

규격: 15mm x 4mm x 845mm

⑻ 아이소핑크

재질: 폴리스틸렌

규격: 845mm x 845mm x 16T

⑼ 충진재(건축용실링재)

건축용 실링재로 스틸패널의 이음새 실링 및 접착에 적합한 실란트계 또는 우레탄계 실링재를 사용하며 감독원의 승인을 받은 정품이어야 한다.

2.1.2  재료의 운반 및 취급

⑴ 자재의 운반 및 취급 시 파손되지 않도록 주의하고, 손상된 제품은 즉시 반출하여야 한다.

⑵ 자재는 포장된 상태로 현장에 반입하고 청결하고 통풍이 잘되는 장소에 훼손되지 않도록 보관하며 습기 및 화기에 주의하여야 한다.

⑶ 인화성·유독성 물질은 ｢위험물안전관리법｣에 따라 관리하여야 한다.

2.2  환 경 요 구 사 항

2.2.1  환경요구사항

⑴ 승인된 제조업자의 제품자료에 별도의 명시가 없는 한 비가 오거나 상대습도가 85%를 초과하는 경우 혹은 기온이 –10℃미만 또는 40℃이상일 경우에는 공사를 실시할 수 없다.

⑵ 분사 도포작업 전에 피도면의 수분 함유량 등을 확인하고 표면에 습기가 없도록 완전히 건조시킨 후 작업을 실시하여야 한다.

2.3  방 수 공 사

2.3.1  작업준비

⑴ 시공현장에 반입된 자재는 자재, 방수재 별로 구분하여 시공할 현장에
적정량을 배분한 뒤 그 수량을 확인하여야 한다.

⑵ 시공면적 및 시공조건에 따라 사전에 시공인원을 배정하여야 한다.

⑶ 시공 전 감독자에게 시공 범위 등을 재확인하고 승인을 받아야 한다.

2.3.2 시공방법

- 방수패널 설치

⑴ 방수패널은 건물 옥상의 실제구조 및 형태에 맞추어 설치하되 들뜸 또는 꺼짐이 없도록 하여 꿀렁거림이 없어야 하며 방수패널과 실리콘 보호몰딩은 바둑판 형태로 줄이 맞아야 하고 방수 패널의 코너 마감은 직각 부분에 벌어진 틈이 없도록 마감하여야 한다.

⑵ 방수패널은 빗물의 배수를 원활히 하고 빗물고임이 없도록 설치하기 위하여 우수관이 위치한 곳에서 반대쪽 옥상 가장자리 또는 옥상중앙 부분 쪽으로 설치하여 경사각이 만들어지도록 하여야 한다. 이미 빗물 배수가 원활하도록 경사각이 형성된 옥상 바닥이난 물구배 공정을 마친 옥상은 효율적인 시공을 위하여 옥상의 다른 부분부터 시공할 수 있으면 이때 우수관이 위치한 곳의 방수패널은 설치된 방수패널의 플랜지 아래쪽에 방수패널의 플랜지를 넣는 방법으로 시공하여 빗물의 흐름을 원활히 하여야 한다.

⑶ 평탄한 방수바탕은 먼저 방수패널을 옥상의 난간과 맞닿도록 바닥에 올려놓은 뒤 방수패널의 플랜지 체결공에 하부 브라켓을 끼우고 플랜지의 상부에 전용실리콘을 1차 도포하여야 한다. 이때 플랜지에 도포하는 실리콘은 하부 브라켓의 수직볼트 기둥 주번에도 도포하여 플랜지의 체결공이 빈틈없이 메꿔지도록 하영 한다.

⑷ 방수패널의 플랜지에 도포한 1차 실리콘과 겹쳐지면서 부착되는 다른 방수패널의 플랜지 하부는 1차 실리콘에 밀착되면서 플랜지에 체결공이 하부 브라켓의 수직 볼트 기둥에 끼워지도록 설치하여야 한다.

⑸ 차례로 설치하는 방수패널의 플랜지 하부는 이미 설치되어 있는 방수패널의 플랜지 상부에 도포한 전용실리콘과 부착되도록 하며 방수패널의 체결공이 모두 겹쳐지면 하부 브라켓의 수직 볼트 기둥에 상부 브라켓(와셔)를 끼워 모두 결합된 방수패널의 체결공을 너트로 고정하여야 한다.

⑹ 하부브라켓의 수직볼트기둥에 결합된 상부 브라켓(와셔)과 너트에 묻은 전용 실리콘은 결합된 브라켓의 이음새가 보이지 않도록 빈틈없이 다듬어 매끄럽게 마감 지어야 한다.

⑺ 방수패널이 옥상바닥면에 밀착되지 않아 꿀렁거림이 있는 곳은 시멘트1:모래2(f레미탈)로 수평을 잡아 방수패널이 움직이지 않도록 하며 그래도 방수패널이 밀착되지 않아 들뜨는 곳에는 방수패널의 플랜지와 바닥을 천공하고 칼블럭을 삽입하여 방수패널을 옥상바닥에 고정하여야 한다. 플랜지와 바닥을 천공하여 칼블럭을 삽입할 때에는 천공할 때 생긴 시멘트가루를 제거하고 구멍 속으로 실리콘을 충진한 뒤 칼블럭을 고정시켜야 한다.

⑻ 방수패널을 그대로 설칠할수 없는 옥상바닥돠 구조물들은 실측한 크기로 방수패널을 그라인더로 절단하며 옥상의 구조와 형태에 맞도록 방수패널을 절단할 때에는 옥상바닥이나 벽면과 맞닿는 쪽의 아이소핑크를 1.5 ~ 2cm 제거하여 공간을 확보한 뒤 실리콘을 충분히 충진하여야 한다.

실리콘을 충진하여 접착하는 부분은 먼지나 이물질 등이 없도록 하여야 하며 모래 등을 포설 도포한 곳에는 반드시 방수패널조각 등을 깔아서 실리콘의 부착면을 확보하여야 한다. 그리고 방수패널을 절개하여 구조물에 끼워 넣거나 설치하는 작업자는 절개한 아랫똑에 충진한 실리콘이 절개한 틈 사이로 충분히 밀려나오도록 설치하여야 하며 이때 실리콘은 절개한 부분이 보이지 않도록 마감하여야 한다. 또한 방수패널이 뒤틀리거나 위로 솟구치는 곳이 없어야 하며 절개한 부분이 서로 맞닿지 않거나 벌어지면 반드시 무거운 물건 등으로 눌러서 모양을 바로 잡아 놓고 실리콘이 건조되도록 하여야 한다.

⑼ 방수패널을 절개하여 실리콘으로 마감한 부분의 상부에는 보호커버를 가공하여 절개한 곳의 실리콘이 외부로 노출되지 않게 마감하여야 한다.

- 1차 미시(보강부재) 설치

⑴ 방수패널이 난간하단부, 구조물과 맞닿는 곳은 보강부재를 사용하여 방수 패널와 보강부재 그리고 난간 하단부를 일체로 고정하여야 한다. 방수패널과 보강부재를 견고하게 부착하기 위하여는 보강부재의 밑면 즉 방수패널과 보강부재가 맞닿는 밑면의 바깥쪽 부분에 1차 실리콘을 어른새끼 손가락 굵기로 도포하여야 하며 방수패널들의 이음새에도 실리콘을 호두알 크기로 충진하여 방수패널의 이음새가 가득 차면서 방수패널의 높이보다 실리콘이 더 높도록 충진하여야 한다.

⑵ 보강부재의 밑면에 1차 실리콘을 도포한 뒤 보강부재의 1차 실리콘이 방수패널과 맞닿도록 뒤집어 올려놓고 벽면과 방수패널에 동시에 맞닿게 힘을 주어 밀착시켜야 한다. 보강부재에 힘을 주어 방수패널이 움직이지 않도록 한 뒤 보강부재와 난간을 천공하여 칼블럭으로 고정하여야 한다.

⑶ 3m 보강부재의 겹침은 3cm이며 보강부재의 고정을 위하여는 천공하는 순서는 보강부재가 서로 겹치는 곳에 1회 그리고 1m 지점마다 1곳씩 칼블럭을 고정하여 3m 보강부재의 경우 모두 4곳을 칼블럭을 고정하여야 한다.

⑷ 보강부재의 상부와 하부이음새에는 어른 새끼손가락 굵기로 실리콘을 도포하여 칼블럭을 고정한 곳에도 빈틈없이 충진 한 뒤 실리콘 헤라로 공기층이 없도록 다듬질 하여야 한다. 이때 난간과 방수패널의 연결부에 빈틈이 없도록 하여야 한다.

- 보강부재 “ㄴ” 제작 설치

⑴ 보강부재를 난간에 부착할 수 없는 때에는 “ㄴ”으로 제작한 연결부재를 사용하며 위 1차 미시의 시공법을 준용하여 시공하여야 한다.

⑵ 연결부재를 옥상바닥 쪽으로 밀착시켜 방수패널이 움직이지 않도록 한 뒤 칼블럭으로 고정하여야 한다.

⑶ 연결부재의 하부이음새와 상부에는 실리콘을 충진하여 이음새가 없도록 시공하여야 한다.

- 2차미시 (물꺽이 마감재), 구조물 마감

⑴ 2차 미시는 난간과 보강부재의 실리콘을 감싸도록 설치하여 난간과 맞닿는 2차미시의 상부는 투명 외장 실리콘을 도포하여 미관상 깔끔하게 처리하여 빗물이 침투하지 않도록 하여야 한다.

⑵ 2차미시로 구조물의 각진 곳을 가공할 때에는 각자 45˚ 사용하며 2차미시의 각진 곳은 보강마감재에 투명실리콘을 도포하여 깔끔하고 견고하게 마감지어야 한다.

⑶ 2차미시의 겹침은 3cm로 하며 2차미시가 겹치는 곳에는 리벳을 시공하여야 한다.

⑷ 건물의 벽체 또는 난간에 단열재가 붙어 있는 때에는 단열재를 제거하되 바닥에서 12cm를 절단하여 제거하고 1차 미시를 부착하여야 한다.

⑸ 옥상바닥으로 유입된 파이프, 전기선 등이 불필요한 것으로 확인된 것은 제거하여 유입구를 빈틈없이 메꾸어야 하며 전기선 등을 감싸는 보호관이 있으면 보호관을 벗겨내고 원선과 유입규를 빈틈없도록 메꿈하여야 한다.

⑹ 방수패널을 설치하여 옥상출입구로 빗물이 유입이 우려되는 때에는 출입구 안쪽에 문턱에 각재를 사용하여 빗물의 넘침을 방지하여야 한다.

⑺ 옥상에 다양한 구조물을 감싸야 하는 때에는 반드시 구조물의 형태에 맞도록 제작하여 구조물을 씌어야 한다.

- 열반사단열재 시공(선택사양)

⑴ 단열성능을 보완하기 위하여 열반사단열재 등을 부가할 때에는 단열재의 이음부에 은박테두리를 붙여 시공하여야 한다.

열반사단열재 등을 1차로 옥상바닥에 올려놓고 방수패널의 내부에 아이소핑크를 삽입하여 2중 단열, 방수를 실시할 때 시공자의 이동동선을 고려하여 시공방향, 시공방법을 사전에 계획하여 열반사단열자가 시공 완료된 구간으로 이동하지 않도록 계획하여야 한다.

- 패널 이음부의 충진재

⑴ 방수패널의 연결부에 충진하는 실리콘은 진동, 온도의 변화에 대하여 우수하여야 하며, 재료에 충분한 접착성을 유지하는 실리콘계 실란트 또는 우레탄계 실란드 등을 충진한다.

⑵ 방수패널의 플랜지 이음새는 10*10 이상으로 실리콘을 충진하여야 하며 실리콘의 내부에 공기층이 제거 되도록 실리콘용 헤라를 사용하여 마감하여야 한다.

⑶ 실리콘은 자외선 등 외부환경에 노출되지 않도록 알미늄 보호 몰딩을 씌워 실리콘이 딱딱해져 갈라지는 노화현상을 방지하여야 한다.

- 난간 방수패널의 설치

⑴ 벽체 바탕면은 방수패널의 설치에 간섭받는 현저한 돌기물 등을 철거하여야 하며(고정부착물일 경우는 제외) 벽체와 박리된 페인트 및 이물질 등은 주걱 헤라 등으로 제거하여야 한다.

⑵ 벽체에서 일시적으로 분리한 전선 등과 같은 부착물은 재설치 시까지 훼손하거나 손상되지 않게 관리하여야 한다.

⑶ 벽체 바탕면의 균열이 심각하여 외벽면 까지 크랙이 진행된 경우는 외벽면의 갈라진 부위를 실리콘 등으로 보수하여 빗물이 침투하지 않도록 하여야 한다.

⑷ 벽체가 심각하게 훼손된 부분은 미장 등 벽체 원형을 복원하는 작업을 진행한 뒤 방수 패널을 설치하여야 한다.

- 벽체 방수패널 설치

⑴ 벽체방수패널은 건물난간의 실제구조 및 형태에 맞추어 설치하되 옥상바닥면의 경사각을 고려하여 방수패널이 수직, 수평을 이루도록 설치하여야 한다.

⑵ 벽체에 시공하는 벽체방수패널은 옥상바닥과 벽체가 맞닿는 “ㄴ” 이음새부분에 시공된 보강부재를 충분히 덮어씌울 수 있도록 방수패널의 하단부에 경사각을 주어야 한다.

⑶ 경사각을 준 벽체방수패널의 안쪽 면은 락카 등으로 도장하여 부식을 방지하여야 한다.

⑷ 벽체방수패널의 고정은 방수패널의 플랜지가 서로 겹쳐진 상태에서 플랜지와 벽체에 드릴링하고 천공한 곳에 칼블럭을 삽입하여 방수패널이 움직이지 않도록 하여야 한다.

⑸ 수직, 수평을 이루는 벽체방수패널의 연결부 이음새는 외장형 투명실리콘을 충진하여 빗물의 유입을 막도록 하여야 한다.

⑹ 벽체 위쪽의 두겁은 실측하여 원래의 모양대로 절곡, 제작하여 설치하고 강풍 등의 외력으로 인해 뜯겨져 날아가지 않도록 하여야 한다.

⑺ 콘크리트속의 잔존 수분을 양호하게 탈기 하도록 우수관 쪽의 하부를 열어 수분을 배출하거나 방수패널의 가장자리와 맞닿는 벽체 연결부위에 빈틈이 없도록 내장 탈기장치를 설치하여 패널내부에 수분을 배출한다.

⑻ 탈기관은 스틸패널의 1차보강부재와 마감재의 내부에 설치하며 플랜지의 하부에 형성된 수분 이동로와 탈기관의 배출구가 연결되도록 하여야 한다.

- 외벽 방수

⑴ 건물 외벽은 발수제를 도포하여 내벽에 물이 새지 않도록 하여야 한다.

2.3.3 청소 및 보양

⑴ 작업장에 남은 자재, 포장재, 쓰레기 및 기타 공사와 관련된 도구는 공사의 원활함과 안전을 위하여 깨끗이 정리, 정돈하면서 작업을 수행하여야 하며 불필요한 부속물은 깨끗이 제거한다.

⑵ 작업 진행 중에 발생될 수 있는 방수시트의 손상을 미연에 방지하기 위하여 기 완료된 또는 설치 중인 방수시트는 손상이 가지 않도록 보양 작업함을 원칙으로 한다.

2.3.4 수리 및 교체

⑴ 방수공사 진행 중에 발생 될 수 있는 방수패널의 손상은 보수되어양 하며 이러한 방수 패널이 발주자나 건축가가 만족하는 수준으로 보수될 수 없을 때는 제거하여 교체 시공하도록 한다.

2.4  설 계 도 면